11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 구에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척률(%)
공립어린이집 신축	3,701	-	-	3,041	2016	2014	30%
선암호수공원 무지개놀이터 조성사업	3,700	-	-	3,700	2015	2014	10%
예술이 숨쉬는 길 조성(2구간)	5,200	-	-	5,200	2016	2014	30%

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

공립어린이집 신축

담당자

여성가족과 이정희

(☎052-226-6970)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공립어린이집 신축으로 양질의 보육서비스 제공으로 보육수준 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016

○ 위 치 : 울산 남구 달동 1329-8

○ 규 모 : 부지(598㎡) 건물 600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,071백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,071		1,648	800	623
국 비	251		-	251	-
시 도 비	1,825		1,648	177	-
시군구비	996		-	372	623
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 부지매입 완료 : 2014. 11. 26.

○ 실시설계 준공 : 2015. 7월

□ 향후계획

○ 건축공사 착공 : 2015. 9월

○ 건축공사 준공 : 2016. 3월

○ 개원 : 2016. 6월

사업명

선암호수공원 무지개놀이터 조성사업

담당자

공원녹지과 정현수

(☎052-226-4851)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선암근린공원 공원조성계획에 따라 조성하는 유희시설 조성사업임

○ 선암호수공원은 어린이들이 이용할 수 있는 시설이 전무한 실정으로 가족단위 이용객들의 불편해소 및 활기찬 공원조성을 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 1월 ~ 12월

○ 위 치 : 남구 선암동 656번지

○ 규 모 : 11,274㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	3,700	-	-	3,700	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015. 3월 : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2015. 7월 ~  8월 : 도시계획시설사업 실시계획인가

○ 2015. 8월 ~  9월 : 보상추진

○ 2015. 9월 ~ 12월 : 사업시행

사업명

예술이 숨쉬는 길 조성사업(2구간)

담당자

도시창조과 서지영

(☎052-226-5883)

□ 사업목적 및 필요성

○ 왕생로 일원의 역사․문화적 요소를 접목하여 사람 중심의 걷고 싶고 품격

있는 디자인 특화거리를 조성하여 주민 편의 제공 및 도시 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위 치 : 남구 왕생로 일원(남구청 사거리 ~ 뉴코아 아울렛)

○ 규 모 : 특화거리 L=535m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,200	-	62	5,138	-
국 비	1,200	-	62	1,138	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,000	-	-	4,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ '13. 07. : 국토교통부 도시활력증진지역 개발사업 확정

○ ‘14. 03. ~ ’15. 03. : 실시설계용역, 주민설명회, 디자인자문, 지중화협약 등

○ ‘15. 07. : 공사 발주 및 입찰, 지중화사업 착수

□ 향후계획

○ ‘15. 08. ~ ’16. 04 : 공사 및 지중화사업 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 4,700백만원 → 변경 5,200백만원 (공사비 부족으로 추가 확보)

○ 사업기간 : 당초 2014~2015년 → 변경 2014~2016년 (공사기간 부족으로 연장)

11-2. 지방채 발행사업: 해당없음

11-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황: 해당없음

11-3. 민간투자사업: 해당없음

11-3-1. 개별 민간투자사업 현황: 해당없음