9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
문수국제양궁장 인조잔디교체	2,240	-	-	2,240	2016	2015	0
고래문화특구 홍보관조성	9,892	-	-	9,892	2018	2015	20
고래문화마을 5D 입체영상관건립	4,335	-	-	4,335	2017	2015	35
해피투게더타운조성	14,300	-	4,200	10,100	2018	2015	15
울산 남구 유스호스텔건립	32,400	38	100	32,262	2019	2015	10
옥동우수저류시설 설치사업	7,500	-	-	7,500	2017	2015	10
태화강둔치 친수시설 조성	2,650	-	-	2,650	2017	2015	0
무거동 공영주차장 건축	3,800	-	-	160	2017	2015	5
왕생이길 주차장 조성	4,500	-	-	2,600	2017	2015	10
삼산디자인거리 공중보행로설치	15,000	-	50	14,950	2018	2015	5
선암지구 생활환경개선	7,830	-	-	7,830	2019	2015	10
장생포마을 생활여건개조사업	8,475	-	1,571	6,904	2018	2015	20

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

문수국제양궁장 인조잔디 교체

담당자

문화체육과

라승태(☎226-5433)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2004년도에 조성된 인조잔디의 내구연한이 경과하여 잔디의 노후로 인한       이용자들의 건강과 안전에 위해를 끼침.

○ 쾌적하고 안전한 체육환경 조성으로 생활체육 활성화에 기여.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 4월 ~ 2016년 5월

○ 위 치 : 울산 남구 남부순환도로 209(옥동 855번지)

○ 규 모 : 노후 인조잔디 철거 및 재설치 (A=22,500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,240			2,240
국 비
시 도 비
시군구비	2,240			2,240
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

□ 향후계획

○ 2016. 4월 : 인조잔디 제품 선정 및 인조잔디 제작

○ 2016. 5월 : 기존 인조잔디 철거 및 재설치

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 2016년 11월 ~ 12월

○ 2016. 11월 : 인조잔디 제품 선정 및 인조잔디 제작

○ 2016. 12월 : 기존 인조잔디 철거 및 재설치

사업명

고래문화특구 홍보관 조성

담당자

장생포고래특구개발단

박재완(☎226-5523)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장생포 고래문화특구에 지속적인 성장동력을 제공하고 가족단위 관광객 편의시설 제공과 고래문화특구의 거점 역할

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015. 10월 ~ 2017.12월

○ 위 치 : 매암동 220-7번지 일원

○ 규 모 : 해군 231전진기지, 연립주택 매입 후 리모델링(3,242㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   9,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	9,892			7,492	2,400
국 비
시 도 비
시군구비	9,892			7,492	2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 해군 231전진기지 매입완료

□ 향후계획

○ 해군 231전진기지 잔여부지 매입

○ 리모델링 실시설계 및 시행

사업명

고래문화마음 5D입체영상관 건립

담당자

장생포고래특구개발단

박재완(☎226-5523)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장생포 고래문화특구내 운영중인 고래문화마을을 방문하는 관광객에게 생동감 넘치는 입체영상물 제공으로 고래문화관광 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015. 10월 ~ 2017.7월

○ 위 치 : 장생포 고래문화마을 동쪽 정상부

○ 규 모 : 지상 2층 연면적 499㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   4,335백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,335			3,035	1,300
국 비
시 도 비
시군구비	1,335			1,335
지 방 채
민간자본
기 타	3,000			1,700	1,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 실시설계 완료 공사시행중(터파기 및 기초공사)

□ 향후계획

○ 2017. 7. 공사완료

□ 사업변경 내역

- 사업규모 변경 내역

(단위 : 억원)

구 분	당 초		변 경		증액사유
	사업비	사업규모	사업비	사업규모
계	28	지상2층 511㎡	43	지상2층 499㎡
공사비 (구비)	13		13
기 타 (기부금)	15 (공사비 15)		30 (공사비 15) (기부물품15)		기부물품 15억 (설계서3억,영상장비 12억) 반영

사업명

해피투게더타운 조성

담당자

어르신장애인복지과

박세준 (☎226-6933)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리 구에서 추진하는 공공복합시설(동 주민센터, 지역자활센터, 다문화가족지원센터, 강당 등)과 한국토지주택공사의 행복주택 건설사업을 융합하여 취약계층의 주거기반 제공 및 지역 주민들의 이용편의 도모를 위한 해피투게더 타운 복합시설 건축물을 건립코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 :  2015년 ~ 2018년

○ 위 치 :  울산 남구 야음동 370-6번지

○ 규 모 :  지하2층/지상17층/1동, 연면적 8,712㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,300 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	14,300	500	3,700	10,100
국 비	4,700	500	3,700	500
시 도 비
시군구비	500			500
지 방 채
민간자본
기 타	9,100			9,100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2015.  8. 20 : 해피투게더타운 조성 업무협약체결(LH공사)

○ 2015. 12. 23 : 사업승인 취득 (국토교통부)

□ 향후계획

○ 2016. 07월 중 : 사업승인 변경신청 (국토교통부)

○ 2016. 12월 중 : 착공

○ 2018. 10월 중 : 준공

사업명

유스호스텔 건립사업

담당자

여성가족과

강정미(☎226-4980)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건립대상지역의 체육‧공원‧교육시설과 연계한 청소년수련시설 확충으로

지역의 청소년들에게 건전한 청소년수련활동의 장을 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위 치 : 옥동 산 22-1번지 일원

○ 규 모 : 연면적 9,847.08㎡(지하 1층 지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	32,400	38	100	2,900	29,362
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015.  5. : 건립 타당성 및 기본 계획 용역 실시

○ 2015.  9. : 남구 유스호스텔 건립심의위원회 개최

○ 2015. 10. : 개발제한구역 관리 계획 변경 용역 실시

○ 2015. 11. : 구 중기 지방 재정 계획 반영 및 투융자심사 실시

○ 2015. 11. : 개발제한구역 관리계획 국토교통부 제출

□ 향후계획

○ 2016년 : 개발제한구역 관리계획 국토교통부 협의 진행

부지 조성 기본 및 실시 설계 용역

○ 2017년 : 건립 기본 및 실시 설계 용역

○ 2018 ~ 2019 : 공사 착공 및 준공

사업명

옥동 우수저류시설 설치 사업

담당자

안전총괄과

김정규(☎226-3503)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여천천 홍수조절 등을 통한 침수피해 예방 및 주민 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2017

○ 위 치 : 울산 남구 옥동 596-2번지 일원

○ 규 모 : 저류시설 130,000㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,500			1,696	5,804
국 비	3,750			848	2,902
시 도 비	1,875			424	1,451
시군구비	1,875			424	1,451
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2016. 3. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 추진

□ 향후계획

○ 2016. 10. ~ 2017. 1. : 편입 토지 및 물건 보상실시

○ 2017. 2. ~ 12. : 우수저류시설 설치 공사 시행

사업명

태화강 둔치 친수시설 조성

담당자

건설과 김정범(☎226-5831)

□ 사업목적 및 필요성

○ 태화강을 단순한 휴식공간에서 벗어나 체험하고 즐길 수 있는 친수공간으로       조성하여 시민들의 삶의 질 향상 및 도시활력 증진

○ 울산 남구의 새로운 랜드마크 조성을 통한 관광수요 창출 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1월 ~ 2017년. 12월

○ 위 치 : 울산광역시 남구 태화강 둔치 일원(구 태화호텔 앞)

○ 규 모 : 바닥분수(원형 D=30m), 분수주변 물놀이장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	2,650				2,650
국 비
시 도 비
시군구비	2.650				2,650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2015. 10. 30. : 투자심사 완료

□ 향후계획

○ 2017년 당초예산 구비 확보 추진

사업명

무거동 공영주차장 건축

담당자

교통행정과

최성훈(☎226-5911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주거지역과 상가 밀집지역이 혼재하고, 대상지 도로변의 불법 주정차로 인해   교통환경이 매우 열악하여 교통민원 다수발생

○ 공영 주차공간 마련으로 주차환경을 개선시켜 지역상인, 주민의 생활여건이 편리해  지고 이를 통해 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3. ~ 2017. 6.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 무거동 1533-6(무거동공영주차장)

○ 규 모 : 지상 4층5단, 면수 100면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	3,800	-	-	3,800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,900	-	-	1,900	-
시군구비	1,900	-	-	1,900	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 울산광역시·남구 중기지방재정계획 반영 : 2014. 12.

○ 남구 지방재정 투자심사 승인 : 2015. 11.

○ 주차장 실시 설계비(1.6억원) 확보 : 2016. 당초예산

□ 향후계획

○ 시 지방재정 투자심사 승인신청(울산광역시) : 2016. 8.

○ 착공 및 준공 : 2017. 3. ~ 12.

사업명

왕생이길 주차장 조성

담당자

교통행정과

최성훈(☎226-5911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화와 예술이 공존하는 보행자 중심의 왕생이길 조성에 따라 사업구간 내 주차난 해소 및 불법 주정차 근절로 지역상권 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12. ~ 2017. 6.

○ 위 치 : 달동 1345-6(분홍공원)

○ 규 모 : 지하2층, 주차면수 107면, 연면적 3,851㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	4,500	-	-	4,500	-
국 비	2,300	-	-	2,300	-
시 도 비	1,200	-	-	1,200	-
시군구비	1,000	-	-	1,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 시 지방재정 투자심사 반영 : 2015. 5. 19.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2015. 12. 7 ~ 2016. 4.

□ 향후계획

○ 시 지방재정 투자심사 승인 : 2016. 5.

○ 공사 착공 : 2016. 6. 30.

사업명

선암지구 생활환경 개선사업

담당자

도시창조과

김병국(☎226-4862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가산업단지 인접지역으로 고립되어 도시기능이 쇠퇴된 선암본동의 주거환경       개선으로 주민 삶의 질 향상 및 공동체 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 남구 선암동 181-121번지 일원

○ 규 모 : 주거환경개선 A=70,610m2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,830 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	7,830	-	-	305	7,525
국 비	3,000	-	-	105	2,895
시 비	1,500	-	-	52.5	1447.5
구 비	3,330	-	-	147.5	3182.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ ‘15. 04. : 2016년 도시활력증진지역 개발사업 공모 신청

○ ‘15. 10. : 사업대상지 선정

○ ‘16. 04. ~ 12. : 마스터플랜 및 실시설계용역

○ ‘16. 05. ~ 07. : 용역보고회, 주민아카데미, 주민설명회, 주민학교 운영 등

□ 향후계획

○ ‘16. 07. ~ ’16. 12. : 마스터플랜 및 실시설계용역(토목)

○ ‘16. 10. ~ ’17. 03. : 실시설계용역(건축)

○ ‘17. 01. ~ ’19. 12. : 보상 및 공사

사업명

장생포 새뜰마을 사업

담당자

도시창조과

김병국(☎226-4862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상업 포경금지 이후 인구감소, 고령화, 주택 노후화, 슬럼화 등으로 도시       기능이 쇠퇴한 장생포 마을의 주거환경 개선으로 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 남구 장생포동 41-4번지 일원

○ 규 모 : 주거환경개선 A=159,750m2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,475 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	8,475	-	224	2,761	5,490
국 비	5,162	-	224	1,866	3,072
시 비	664	-	-	268	396
구 비	2,649	-	-	627	2,022
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ ‘15. 02. : 2015년 취약지역 생활여건 개조사업 공모 신청(지역발전위원회)

○ ‘15. 03. : 사업대상지 선정

○ ‘15. 12. ~ ’16. 08. : 마스터플랜 수립용역(기술분야, 사회·경제분야)

○ ‘15. 12. ~ ’16. 07. : 용역보고회, 주민설명회, 주민협의회 구성, 마을학교 운영 등

□ 향후계획

○ ‘16. 07. ~ ’16. 12. : 실시설계용역

○ ‘16. 08. ~ ’18. 12. : 보상 및 공사

사업명

삼산디자인거리 공중보행로 설치 사업

담당자

도시창조과

유상화(☎226-4841)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산의 중심 상권인 삼산동의 경쟁력 확보 및 상권 활성화, 관광객 유치,       도심재생, 편의제공 등을 위해 차별화된 시설인 공중보행로 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 삼산디자인거리 일원(현대백화점~업스퀘어)

○ 규 모 : L=605m(양방향), B=3m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	15,000	44	44	289	14,667
국 비
시 도 비
시군구비		44	44	289	14,667
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ‘15. 3. ~ ’15. 10. : 타당성 조사 및 기본계획 수립

- 개발여건 및 사업성 분석, 설문조사, 기본구상 등

○ ‘15. 9. : 주민의견조사 실시(울산시민 500명)

- 울산대공원, 태화강대공원, 공업탑, 중구 문화의거리, 울산대학교 등

- 개별 1:1 인터뷰방식(조감도·투시도 전시)

○ ‘16. 6. : 설계용역 착수

□ 향후계획

○ '16. 6. ~ '17.  2. : 기본 및 실시설계용역 시행

○ ‘17. 3. ~ ’18. 12. : 공사시행

9-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

9-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 해당없음

9-3. 민간투자사업 : 해당없음

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황 : 해당없음