109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남구에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
도산노인복지관 증축(어르신장애인복지과)	2,600	-	600	2,000	2019	2017	설계중 (17.12.11~18.6.8)
남구 장애인 행복일자리지원센터 건립(어르신장애인복지과)	3,248	-	960	2,288	2019	2017	설계중 (17.11.17~18.4.15)
해피투게더타운 조성(어르신장애인복지과)	22,116	10,515	7,725	3,876	2019	2017	50%
2017 태화강 푸드 페스티발(위생과)	100	0	100	0	2017	2017	100
고래문화특구 어린이 테마파크 건립(장생포고래특구개발단)	9,200	62	3,000	0	2018	2017	100
장생포고래로 워터프론트 조성(장생포고래특구개발단)	3,000	0	3,000	0	2018	2017년	100
장생포예술창작소 조성사업(장생포고래특구개발단)	9,373	2,500	4,276	2,597	2019	2016	20
행복안전체험관 건립(안전총괄과)	2,300	-	2,300	-	2018	2017	100
선암동 대나리문화회관 인근 도로확장(건설과)	5,200	-	700	4,500	2019	2017	2.6
삼호동 공영주차장 조성(교통행정과)	7,500	6	3,243	4,257	2019	2017	0
무거 섬들공원 공영주차장 확장(교통행정과)	2,000	0	0	2,000	2019	2017	0
치매안심센터 건립(보건소)	2,174		14	2,160	2018	2017	10
무거동 공영주차장&건강생활지원센터 건립(교통행정과,보건소)	6,000	0	364	5,636	2018	2017	53

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도산노인복지관 증축

담당자

어르신장애인복지과 김경이

(☎226-6960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령화로 급증하는 노인복지 수요에 맞는 시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 대암로129번길 4(야음동)

○ 규 모 : 744㎡(지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,600		600	1,500	500
국 비
시 도 비
시군구비	2,600		600	1,500	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

○ 2017. 9. : 지방재정투융자심사, 공유재산심의, 2018 중기지방재정계획 반영

○ 2017. 12. : 기본 및 실시설계 용역 계약

□ 향후계획

○ 2017. 12. ~ 2018. 6. : 기본 및 실시설계

○ 2018. 8. ~ 2019. 6. : 공사 착공 및 준공 예정

사업명

남구 장애인 행복일자리 지원센터 건립

담당자

어르신장애인복지과 이현진

(☎226-4870)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신정장애인보호작업장은 37년된 건물, 노후협소, 작업환경 불편

○ 장애인 일자리 창출과 동시에 쾌적한 생활과 접근용이성을 보장하고

안정적인 직업재활서비스 기능강화 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 삼산동 1466-3번지

○ 규 모 : 부지 371㎡(112.3평) / 연면적 740.53㎡(224평), 지상5층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,248백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,248		960	2,288
국 비	362		20	342
시 도 비	1,499		80	1,419
시군구비	1,387		860	527
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계중)

○ 2017.9. ~ 11. : 지방재정투융자심사, 공유재산심의, 중기지방재정계획 반영

○ 2017. 11. : 기본 및 실시설계 용역 추진

□ 향후계획

○ 2017. 11. ~ 2018. 4. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2018. 7. ~ 2019. 3. : 공사 착공 및 준공 예정

사업명

해피투게더 타운 조성

담당자

어르신장애인복지과 우혜영(☎226-6932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저소득층과 일반계층 주거·고용·복지·행정 복합타운 조성

○ 행복주택의 저렴한 임대료 공급으로 사회적 약자 주거안정 도모

□ 사업개요

○ 사업방법 : 공동시행(남구청, LH)

○ 기    간 : 2015년 ~ 2019년

○ 위    치 : 울산광역시 남구 여천로12번길 50(야음동)

○ 규    모 : 부지 2,489.3㎡, 연면적 8,982.2㎡, 지하2층~지상11층/1동

○ 사업내용 : 공공복합시설, 행복주택

- 지하 2층~지상 2층 : 동주민센터, 지역자활센터, 다문화가족센터(남구청)

- 지상 3층~지상11층 : 행복주택 100세대(LH)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	22,116	10,515	7,725	3,876
국 비	3,625	300	3,625
시 도 비
시군구비	6,679	1,900	2,400	2,079
지 방 채
민간자본
L H	11,812	8,315	1,700	1,797

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2015.  1. 16. : 해피투게더타운 사업 관련 LH부산울산본부 협의

○ 2015.  4. 23. : 해피투게더타운(남구청)과 행복주택(LH) 연계 추진 최종협의

○ 2015.  7. 22. : 「제3차 지방재정중앙투자사업 심사」 가결(행정자치부)

○ 2015.  8. 20. : 해피투게더타운 조성업무협약 체결(LH부산울산본부)

○ 2015. 12. 23. : 사업승인 취득(국토교통부)

○ 2016.  6. 15. : 주민설명회 개최

○ 2017.  3.  6. : 「제1차 지방재정중앙투자사업 심사」 가결(행정자치부)

○ 2017.  4. 13. : 해피투게더타운 조성사업 기공식

○ 2017. 12.  4. : 해피투게더타운(행복주택) 입주자 계약 체결

□ 향후계획

○ 2019. 2. : 준공

○ 2019. 3. : 입주

사업명

태화강 푸드트럭 페스티벌

담당자

위생과 김현정(☎226-5732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2017년 울산방문의 해를 맞이하여 새로운 음식문화 트랜드 제시

○ 한여름 밤의 행사와 병행한 태화강변 음식축제로 행복남구 구현

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 7.14(금) ∼ 7. 20(목) (7일간)

○ 위    치 : 태화강 둔치(태화로터리 앞)

○ 참여인원 : 10,000명

○ 주요내용

∙ 푸드트럭존 : 푸드트럭 35대 배치, 무료시식 이벤트

∙ 이벤트 존 : 대형화채만들기, 아이스카빙쇼, 마임 등

∙ 플리마켓존 : 남구 대표 먹거리 등 30개 업체 참여

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 120백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	100	-	100	-	-
지 방 채
민간자본	20	-	20	-	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017년도 사업 완료

□ 향후계획

○ 2018년 사업계획 없음

사업명

고래문화특구 어린이테마파크 건립

담당자

장생포고래특구개발단 이정원(☎226-5521)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고래문화특구 내에 가족단위 관광객 유치를 위해 해군 231 전진기지를   리모델링하여 관광인프라를 확충하고 관광활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 8월 ~ 2018. 4월

○ 위 치 : 매암동 220-7번지 일원(해군 231전진기지)

○ 규 모 : 리모델링 2,627㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,159백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	92	90	2	-	-
국 비	10	10	-	-	-
시 도 비	2	2	-	-	-
시군구비	80	78	2	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 2016. 11. : 토지 및 건축물 매입 완료

○ 2017.  8. : 실시설계 완료

○ 2017.  9. : 울산광역시 투자심사

○ 2017. 10. : 울산광역시 계약심사

○ 2017. 11. : 공사착공

○ 2018.  4. : 공사준공

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장생포고래로 워터프론트 조성사업

담당자

장생포고래특구개발단 노동훈(☎226-5524)

□ 사업목적 및 필요성

○ 담장, 노후한 어구창고 등 미관전해와 악취 등으로 얼룩진 장생포 부두를       주민들에게 도시 여가 및 복합 문화공간으로 제공하고, 장생포 고래          문화특구의 미관개선을 통하여 장생포 관광발전의 성장 동력으로 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 4. ~ 2018. 3

○ 위 치 : 장생포 60-19 일원(고래바다여행선 선착장~울산세관 통선장)

○ 규 모 : L=640m, B=13~20m(시설물 철거, 판석포장, 조형물 설치 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000	-	2,000	-	-
시군구비	1,000	-	1,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017.  3. : 시 특별조정교부금 공모사업 선정(20억)

○ 2017.  4. : 지방재정 투자심사 및 구비 10억원 확보(1회 추경)

○ 2017.  4. ~ 8. : 실시설계 용역

○ 2017. 10. : 항만공사 시행허가 및 실시계획 승인 및 사업착공

○ 2018.  3. : 사업 완료

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

장생포 A FACTORY 조성공사

담당자

장생포고래특구개발단 황진우(☎226-5523)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고래문화특구 인근에 1973년 건축되어 방치된 냉동창고를 리모델링하여       1962년 대한민국 공업의 출발점인 “ 울산공업센터 특정공업지구”기공식       장소를 기념하고, 예술창작 ·공연·전시공간을 제공하는 복합 문화예술 시설로       재창조하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 3.월 ~ 2019. 4.월

○ 위 치 :장생포동 338-2번지 외 1필지

○ 규 모 : 부지 2,331㎡, 연면적 9,821.10㎡, 지상6층 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,373백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	9,373	2,500	500	3,776	2,597
국 비	2,000	-	-	-	2,000
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,866	2,500	500	3,776	90
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	507	-	-	-	507

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 2016. 8. : 토지 및 건축물 매입

○ 2017. 8. : 주차장부지 매입

○ 2017. 10. ~ 2018. 4. : 설계용역

○ 2018. 6. : 계약체결

□ 향후계획

○ 2018. 8. ~ 2018. 4. : 공사추진

○ 2019. 5. : 시설물 이관 및 운영

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

행복안전체험관 건립

담당자

안저총괄과 박종진(☎226-5283)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재난에 대한 이해와 대처 능력 배양을 위한 교육의 장 마련

○ 안전사고 및 손상 예방을 위한 가상 재난체험 기회 상시 제공

□ 사업개요

○ 기  간: 2017. 6월 ~ 2018. 6월

○ 위  치: 남구 여천로 40 일원

○ 규  모: 지상2층(연면적 408.04㎡, 부지면적 2,738㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,300		153	2,147
국 비
시 도 비
시군구비	2,300		153	2,147	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ 기본 및 실시설계용역(건축, 체험시설): 2017. 6월 ~ 11월

○ 건립 및 설치공사(건축, 체험시설): 2017. 11월 ~ 2018. 6월

○ 체험관 운영 조례 제정: 2018. 3월

○ 체험관 시범 운영: 2018. 6. 15. ~ 6. 24.

○ 체험관 개관: 2018. 6. 25.

사업명

선암동 대나리문화회관 인근 도로확장

담당자

건설과 유상화(☎226-5821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선암동 대나리문화회관 일원 미확장된 도시계획도로(중3-96호선) 확장으로 교통혼잡 해소 및 원활한 교통소통 도모

○ 선암동 일원 교통체계 개선을 통한 주민편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 선암동 대나리문화회관 인근(두왕동 174번길)

○ 규 모 : 도로확장 L=660m, B=8→13m(5m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,200		700	2,800	1,700
국 비
시 도 비	3,700		700	1,300	1,700
시군구비	1,500	-		1,500	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 실시설계용역 중, 2.6%)

○ 2017.  9. : 2018년 중기지방재정계획(2018~2022) 반영

○ 2017. 10. : 시 지방재정 투자심사(적정)

○ 2018.  3. : 실시설계용역(135백만원) 착수

○ 2018.  4. : 특별조정교부금 교부 결정(15억, 1차 추경)

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 도시계획시설(도로) 실시계획인가

○ 2018. 11. ~ 2019. 3. : 편입토지 및 물건 보상협의

○ 2019. 1. ~ 2019. 12. : 공사착공 및 준공

사업명

삼호동 공영주차장 조성

담당자

교통행정과 한성철(☎226-5911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼호동 정광사 일원의 주택가 골목길은 빌라, 다세대주택 밀집지역으로

열악한 주거환경과 협소한 도로, 늘어나는 차량 등으로 만성적인 주차난을

겪고 있어 공영주차장을 신축하여 지역 주민들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 6. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 무거동 1252-6번지 일원

○ 규 모 : 주차건물(3층 4단) 건립, 노외주차장 98면 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,500	6	3,243	100	4,151
국 비
시 도 비	3,500			100	3,400
시군구비	4,000	6	3,243		751

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 공유재산 취득 의회 심의 : 2017. 4월

○ 지방재정 투자심사 : 2017. 10월(울산광역시, 조건부 – 의존재원 확보)

○ 부지매입 : 2017. 5월 ~ 2018. 3월

○ 지구단위계획 변경(단독주택용지→주차장용지) : 2018. 3월

□ 향후계획

○ 실시설계 : 2018년 하반기

○ 공    사 : 2019. 1월 ~ 12월

※ 운  영 : 2020년 ~

사업명

무거 섬들공원 공영주차장 확장

담당자

교통행정과 한성철(☎226-5911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산대학교 앞 상가 주변 골목길의 주차환경이 열악하여 섬들공원의

용도변경 후 공영주차장을 확장하여 지역경제활성화와 주민의 삶의

질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 5월 ~ 2019. 3월

○ 위 치 : 무거동 629-22

○ 규 모 : 주차장 증축 1층 2단(53면) 증

※ 지하 1층(47면) → 지하1층, 지상 1층 2단(100면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000			2,000
국 비
시 도 비	1,500			1,500
시군구비	500			500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 도시계획시설(공원) 변경(폐지) 심의 : 2017. 10.

○ 기본 및 실시설계 : 2018. 2. ~ 4.

○ 적격심사 등 행정사항 : 2018. 5. ~ 7

□ 향후계획

○ 공    사 : 2018. 10. ~ 2019. 3.

○ 정상운영 : 2019. 5월 경

사업명

무거동 공영주차장 & 건강생활지원센터 건립

담당자

교통행정과 한성철(☎226-5911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산의 관문 지역으로 주거지역과 상가지역이 혼재하여 교통상황이 매우

열악한 지역으로 공영주차장 신축으로 주차난 해소와 더불어 지역상권

활성화 및 주민 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 2. ~ 2018. 10.

○ 위 치 : 무거동 1533-6

○ 규 모 : 공영주차장 및 건강생활지원센터 복합건물 건축(6층, 주차면 145면)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000		364	5,636
국 비	66			66
시 도 비	1,933			1,933
시군구비	4,001		364	3,637

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 지방재정 투자심사 : 승인(울산광역시, 2016. 10.)

- 심의결과 : 조건부 승인(내진설계 반영 등 실시설계 후 2단계 심사 시행)

○ 실시설계 : 2017. 2. ~ 6.       ※ 건축설계 공모・선정 : 2017. 1. 13.

○ 일상감사 등 행정사항 : 2017. 7. ~ 10.

○ 착공 및 준공 : 2017. 10. ~ 2018. 10.

□ 향후계획

○ 착공 및 준공 : 2017. 10. ~ 2018. 10.

○ 정상운영 : 2018. 12월 경

사업명

치매안심센터 건립

담당자

보건과 정명희(☎226-2451)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 고령화 대비 치매관리 전문기관인 치매안심센터를 설치하여

○ 조기검진, 1:1 사례관리, 치매단기 쉼터 및 치매카페 운영과 관련 서비스를

안내 및 제공기관과 연계하여 건강한 노년생활 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 2. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 남구 삼산동 1538-4 (보건소 내 유휴지)

○ 규 모 : 지하 1층 ~ 지상3층, 연면적 997.14㎡, 대지면적 300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,474백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,474			2,474
국 비	512			512
시 도 비	64			64
시군구비	1,898			1,898
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ ’17.  2. : 건립부지 확정

센터건립비 595백만원 확보(1차 추경)

○ ’17.  8. : 특별조정교부금 1,000백만원 확보

남구 치매안심센터 건립 규모 및 사업비 확정 (2차 추경)

○ ’17. 10. ~ ’17. 11. : 설계용역 일상감사 및 계약심사, 업체 선정

○ ‘17. 11. ~ ’18.  3. : 설계용역완료, 규모변경(지하1층~지상3층, 연면적 997㎡)

○ ’18.  3. ~ ‘18.  4. : 계약심사 및 일상감사, 공사업체 선정

○ ‘18.  4. : 구비 300백만원 추가 확보(1차 추경)

기공식 및 공사착공

□ 향후계획

○ ‘18. 12. : 공사 준공 및 개소식

10-2. 지방채 발행사업 - 해당없음

우리 남구에서 ‘17년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2017년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 - 해당없음

10-3. 민간투자사업 - 해당없음

우리 남구에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL		해	당	없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 - 해당없음