109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남구에서 ‘18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후
선암동 대나리경로당 이전 신축(노인장애인과)	4,000,	-	-	514	-	2020년	2018년	토지보상절차 진행중
도산노인 복지관 증축 (노인장애인과)	4,260	-	114	-	-	2019년	2018년	공사중 (61%)
문수 청소년 문화의 집 재건축(여성가족과)	4,800	0	0	1,122	3,678	2021	2018	0%
무거동 우신고 일원 도로확장(건설과)	5,000	-	60	3,200	1,740	2020	2018	1.2
수암동 한국알코올사택일원 도로확장(건설과)	2,700	-	8	2,128	564	2020	2018	0.3
남부경찰서 일원 환경개선사업 (공업탑 일원 보행환경 개선사업) (도시창조과)	4,080		2,180	950	950	2020	2018	6
궁거랑 마실길 조성사업 (도시창조과)	2,980		2,680		300	2020	2018	70

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2018년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

선암동 대나리경로당 이전 신축

담당자

노인장애인과 송현숙

(☎ 052-226-6960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 선암동 대나리문화회관의 부족한 공간으로 인한 지역주민과 어르신들의       불편해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. ~ 2020.

○ 위 치 : 남구 선암동 632-1번지 일원(선암근린공원 내)

○ 규 모 : 대지 1,326.67㎡, 연면적 761.8㎡, 지상4층

대나리경로당 이전 신축 및 기존 대나리 문화회관 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,000
국 비
시 도 비	2,400			514
시군구비	1,600			1
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 진행중)

○ 2018. 10. : 중기지방재정계획, 공유재산관리계획 반영

○ 2019.  3. : 기본설계 완료

○ 2019.  4. : 공원조서계획(변경)(안)작성

○ 2019.  4.~5. : 관련실과 협의

□ 향후계획

○ 2019. 8.~9. : 토지보상

○ 2019. 10.   : 실시설계 실시

○ 2020. 2.    : 공사착공

사업명

도산노인복지관 증축

담당자

노인장애인과 송현숙

(☎ 052-226-6960)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고령화 사회에 진입하여 노인인구가 증가함에 따라 노인의 사회활동 지원 및       활기찬 여가활동 등 사회참여에 필요한 기반시설 및 여가시설 확충이 필       요함에 따라 증축 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2019.

○ 위 치 : 남구 야음동 577-6번지

○ 규 모 : 증축 연면적 892㎡(기존 1,461㎡), 지상5층

구관 및 신관 증축 및 리모델링

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,260
국 비
시 도 비	2,400		14	2,386
시군구비	660		100	560
지 방 채
민간자본
기 타	1,200			1,200

□ 추진상황(공사착공, 공정률 : 61%)

○ 2017. 9. : 지방재정투융자심사, 공유재산심의, 중기지방재정계획 반영

○ 2018. 6. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2019. 1. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2019. 9. : 공사 준공예정

사업명

문수청소년문화의집 재건축

담당자

여성가족과

박상준(☎226-4981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1974년 3월 사용 승인된 건물로 구조체 노후화

※ 2018년 내진성능평가 결과 내진보강 필요(내진보강시 4억원 소요)

○ 시설이 협소(398㎡)하여 청소년 이용공간이 부족하고 안전에 위협

○ 자유학기제 전면시행으로 이용수요가 증가하고 있으며 주변 대단위

아파트 단지, 학교 16개와 인접해 이용도 및 수혜도 높음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 남구 북부순환도로 56

○ 규 모 : 지하1층/지상7층(부지면적 275㎡, 연면적 1,360㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,800	-	-	1,122	3,678
국 비	0	-	-	0	0
시 도 비	2,000	-	-	0	2,000
시군구비	1,800	-	-	122	1,678
지 방 채	0	-	-	0	0
민간자본	0	-	-	0	0
기타(특교세)	1,000	-	-	1,000	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업 미시행)

○ 2018. 10. : 구 중기지방재정계획 및 지방재정투자심사 반영

□ 향후계획

○ 2019. 12. : 설게공모, 공유재산심의

○ 2019.  3. : 착공

사업명

무거동 우신고 일원 도로확장

담당자

건설과 하승욱(☎226-5821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무거동 우신고 일원 미확장된 도시계획도로(중2-290호선) 확장으로 교통혼잡      해소 및 원활한 교통소통 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 대학로1번길 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=520m, B=10.0→15.0m(5.0m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	-	60	3,200	1,740
국 비
시 도 비	4,500	-	60	3,200	1,240
시군구비	500	-	-	-	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지 감정평가 중, 1.2%)

○ 2018.  3. : 지방재정 투자심사

○ 2018.  5. : 실시설계용역 착수

○ 2018.  9. : 2019년 중기지방재정계획(2019~2023) 반영

○ 2018. 11. : 실시설계용역 완료

○ 2019.  7. : 토지 감정평가

□ 향후계획

○ 2019. 8. ~ 12. : 편입토지 및 물건 보상협의 ※ 협의 불가시 수용재결 신청

○ 2020. 1. ~  8. : 공사 착공 및 준공

사업명

수암동 한국알콜사택 일원 도로확장

담당자

건설과 하승욱(☎226-5821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수암동 한국알콜사택 일원 미확장된 도시계획도로(중2-251호선, 소1-132호선)      확장으로 교통혼잡 해소 및 원활한 교통소통 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 8. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 중앙로28번길 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=165m, B=6.0→11.5m(5.5m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,700	-	8	2,128	564
국 비
시 도 비	2,700	-	8	2,128	564
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 토지보상 중, 0.3%)

○ 2018.  3. : 지방재정 투자심사

○ 2018.  6. ~ 8. : 실시설계용역

○ 2018.  9. : 2019년 중기지방재정계획(2019~2023) 반영

○ 2018. 10. ~ 2019. 7. : 토지 감정평가 및 보상 협의 ※수용재결(지방토지수용위원회)

□ 향후계획

○ 2019.  8. ~ 11. : 토지 수용재결(지토위 결과에 따라 중토위 이의재결)

○ 2019. 12. ~ 2020. 6. : 공사 착공 및 준공

사업명

남부경찰서 일원 환경개선사업

(공업탑 일원 보행환경 개선사업)

담당자

도시창조과 김성수(☎226-4841)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공업탑 일원 구도심 이면도로상 차량과 보행자 통행 공간 미 분리로 보행환경이 열악함에 따라, 보행자 편의중심으로 환경 개선하여 안전하고 걷고 싶은 거리 조성에 그 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 삼산로35번길 일원(남부경찰서 일원)

○ 내 용

- 보행환경 개선 : L=1.7㎞, A=278,000㎡

- 전선지중화 : L=450m, 공중선 정비 1식

- 간판개선 : L=450m, 30동, 101개 상가, 간판 364EA

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,080		2,180	950	950
국 비	1,400			700	700
시 도 비	100			100
시군구비	1,480		1,080	150	250
지 방 채
민간자본
기 타 (특별교부세)	1,100		1,100

□ 추진상황(실시설계 추진중 : 6%)

○ ‘18. 04. : 보행환경개선 기본 및 실시설계 용역 착수 (‘19. 8 준공예정)

○ ‘18. 10. : 안전한 보행환경조성 공모선정 (행정안전부)

○ ‘19. 05. : 간판개선사업 디자인 및 제작․설치 착수 (‘19. 12. 완료예정)

□ 향후계획

○ ‘19. 10. : 전선지중화(공중선 정비), 보행환경 개선사업 착수

○ ‘20. 12. : 보행환경 개선사업 완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

궁거랑 마실길 조성사업

담당자

도시창조과 김광용(☎226-4842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무거천 주변도로는 열악하여 하천내부에 비해 보행자의 접근로 단절로 지역주민의 보행자 이동동선 확보가 필요한 실정으로 부족한 보행공간 확보와 보행축 조성이 필요함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 남구 무거천(삼호6교~삼호2교) 일원

○ 내 용

- 보행데크 설치(L=890m, B=1.7~2.0m), 경관조명 99본

- 보도확장(L=510m, B=1.0m→2.0m), 하상데크 175m 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,980백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,980		2,680		300
국 비
시 도 비	1,400		1,400
시군구비	580		280		300
지 방 채
민간자본
기 타 (특별교부세)	300		300
기 타 (특별교부금)	700		700

□ 추진상황(2차분 공사추진 중 : 70%)

○ ‘17. 07. : 「市 도시경관 형성 시범사업」공모사업 선정

○ ‘18. 01. : 1차분 시행 (’18. 05. 설계준공, ‘19. 01. 공사준공)

○ ‘19. 02. : 2차분 시행 (’19. 04. 설계준공, ‘19. 12. 공사준공예정)

□ 향후계획

○ ‘19. 12. : 2차분 사업 공사준공

○ ‘20. 1 ~ 12. : 3차분 사업(무거천2교~삼호2교) 설계 및 공사시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음

10-2. 지방채 발행사업 - 해당없음

우리 남구에서 ‘18년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
	해		당		없		음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2018년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황 - 해당없음

10-3. 민간투자사업 - 해당없음

우리 남구에서 ‘18년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후
BTL		해	당		없	음
BTO

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2018년까지는 집행액(결산기준), 2019년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황 - 해당없음