109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남구에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
장생포 예술창작소 건립	9,373	4,100	1,852	3,421	-	2020	2016	5
도산노인복지관 증축	4,067	114	3,953	-	-	2019	2018	100
해피투게더타운 조성	17,364	15,140	1,336	888	-	2019	2015	100
선암동 대나리경로당 이전 신축	3,150	-	516	1,000	1,634	2021	2018	5
남구 장애인 행복일자리지원센터 건립	2,388	736	1,412	-	-	2019	2017	100
문수 청소년 문화의집 재건축	4,800	-	11	2,000	2,789	2021	2018	3
청소년 수련시설 (차오름센터) 건립	8,190	2,396	5,454	-	-	2019	2016	100
자연환경보전 이용시설 조성 (삼호 철새마을 조성)	7,724	2,449	5,225	50	-	2019	2016	95
수암시장 주차장 조성	13,300	-	7,320	298	5,682	2021	2019	30
옥동 우수저류시설 설치사업	7,484	6,267	1,217	-	-	2019	2015	100
선암동 대나리문화회관 인근 도로확장	4,000	135	1,542	1,000	1,323	2021	2017	55
무거동 우신고 일원 도로확장	5,000	58	3,400	600	942	2021	2018	53
수암동 한국알콜사택 일원 도로확장	2,700	33	2,201	200	266	2021	2018	55
삼호 그린빌리지 공영주차장 조성	7,960	4,060	48	3,852	-	2020	2017	25
무거 섬들공원 공영주차장 확장	2,000	453	1,463	-	-	2019	2017	100
선암지구 생활환경 개선사업	8,320.5	4,124	2,252	1,944.5	-	2020	2015	100
갈현지구 외 2개 집단취락지구 연결도로 개설	4,625	197	1,901	1,127	1,400	2021	2016 (2019 재심사)	30
공업탑 일원 보행환경 개선사업	3,430	-	1,184	2,246	-	2020	2018	45
궁거랑 마실길 조성사업	2,680	1,625	1,055	-	-	2020	2018	100
치매안심센터 건립	2,480	1,071	1,409	-	-	2019	2017	100

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

장생포 예술창작소 건립

담당자

관광과 박근용(☎5672)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고래문화특구의 관광 인프라 확충 및 관광활성화를 위해 특구시설과 연계하여 기존의 건축물을 최대한 재활용하여 새로운 볼거리, 즐길거리를 구축하고자 함

□ 사업개요

○ 사업위치 : 장생포고래로 110 (구, 세창냉동)

○ 사업기간 : 2016. 4. ~ 2020. 12.

○ 총사업비 : 9,373백만원(국비 2,000, 구비 6,866 기금 507)

○ 사업내용

- 부지 2,331㎡, 연면적 6,199.38㎡, 지하1층/지상6층

철근콘크리트조(1973년 준공) 리모델링 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,198백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	9,373	4,100	1,852	3,421	-
국 비	2,000	211	-	1,789	-
구 비	6,866	3,889	1,852	1,125	-
기 타	507	-	-	507	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2019.  4.: 설계변경 용역시행

○ 2019. 12.: 계약변경 및 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 12.: 공사 준공

○ 2021.  1.: 위탁운영(고래문화재단)

사업명

도산노인복지관 증축

담당자

노인장애인과 권다영(☎226-6965)

□ 사업목적

○ 고령화 사회 진입에 따라 노인의 사회활동 및 활기찬 여가활동 지원을 도모

○ 기존 시설의 수용인원 증가로 이용자 편익을 위한 시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10. ~ 2019. 11.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 대암로129번길 4(야음동)

○ 규 모 : 부지 2,061㎡, 연면적 2,353.37㎡(증축 892.17㎡), 지상5층

(1층 대강당, 2층 프로그램실, 3층 경로식당, 4층 주간보호센터, 5층 기계실)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,067백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,067	114	3,953	-	-
시 비	3,591	14	3,577	-	-
구 비	476	100	376	-	-

□ 추진상황(추진진도 : 100%)

○2016. 12. : 도산노인복지관 이용 어르신 증축 건의

○2017.  3. : 도산노인복지관 증축(확장) 검토보고

○2018. 10. : 중기재정계획, 투자심사, 공유재산변경심의(30%이상증가)

○2018. 12. : 시공사 입찰 선정

○2019.  1. : 착공

○2019. 12. : 준공

사업명

해피투게더타운 조성

담당자

노인장애인과 강은경(☎226-6931)

□ 사업목적

○ 공공복합시설(동 주민센터, 지역자활센터, 다문화가족지원센터 등)과 한국토지주택공사의 행복주택 건설사업을 융합하여 취약계층의 주거기반 제공 및 지역 주민들의 이용편의 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 1월 ~ 2019년 3월

○ 위 치 : 울산 남구 여천로 12번길 50(야음동)

○ 규 모 : 부지 2,489.3㎡, 연면적 8,982.2㎡, 지하2층~지상11층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,364백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	17,364	15,140	1,336	888	-
국 비	3,625	3,625	-	-	-
구 비	4,588	3,200	500	888	-
기 타	9,151	8,315	836	-	-

□ 추진상황(추진진도 : 100%)

○ 2015.  8. : 해피투게더타운 조성 업무협약(LH공사)

○ 2015. 11. : 기본설계 완료

○ 2016. 11. : 최종 설계(안) 확정

○ 2016. 12. : 착공

○ 2019.  3. : 준공

사업명

선암동 대나리경로당 이전 신축

담당자

노인장애인과 권다영(☎226-6965)

□ 사업목적

○ 선암동 대나리 문화회관 공간 협소 및 지역주민의 고령화로 급증하는 노인복지 수요에 맞는 시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2021. 3

○ 위 치 : 울산 남구 선암동 632-1번지 일원(선암근린공원 내)

○ 규 모 : 대지 1,420㎡, 연면적 761㎡, 지상4층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,150	-	516	1,000	1,634
시 비	2,400	-	516	1,000	884
구 비	750	-	-	-	750

□ 추진상황(추진진도 : 5%)

○ 2018. 10. : 중기지방재정계획 및 투자심사, 공유재산관리계획 반영

○ 2019. 8.~ 2019. 9. : 환경영향평가 및 공원조성계획 변경

○ 2020. 4. : 지질조사 및 임목조사 완료

○ 2020. 5. : 실시설계 완료

○ 2020. 6. : 실시계획인가 완료

□ 향후계획

○ 2020. 7. : BF예비인증, 건축협의, 계약심사 및 일상감사

○ 2020. 8. : 착공

○ 2021. 3. : 준공

사업명

남구 장애인행복일자리센터 건립

담당자

노인장애인과 변은규(☎226-4870)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신정동 소재 신정장애인보호작업장 건물이 노후·협소하여 근로장애인

작업환경이 불편한 상황으로 안정적인 직업재활서비스 제공 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 9. ~ 2019. 6

○ 위 치 : 남구 삼산중로 131번길 26-1(삼산동)

○ 규 모 : 지상1층~지상6층(부지면적 371㎡, 연면적 740.53㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,388백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,388	736	1,412	-	-
국 비	362	124	220	-	-
시 비	1,499	507	829	-	-
구 비	27	-	20	-	-
특 교 세	500	105	343	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 6. 3. : 공사준공

○ 2019. 8. 28 : 개소식 개최

□ 향후계획

○ 2021년 태양광 발전설비 등 기능보강사업 추진

○ 2021년 마스크생산 등 사업영역 확대를 위한 기능보강 추진

사업명

문수 청소년문화의집 재건축

담당자

여성가족과 이세영 (☎226-4981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 청소년문화의집을 재건축하여 안전하고 트렌드에 맞는 청소년 복합       문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.8. ~2021.6.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 북부순환도로 56(무거동)

○ 규 모 : 부지 275㎡, 연면적 1,224.71㎡(지상8층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,800	-	11	2,000	2,789
국 비	1,000	-	-	600	400
시 비	2,400	-	-	1,400	1,000
구 비	1,400	-	11	-	1,389

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

○ 2019. 12. : 설계공모 및 당선작 선정

○ 2020.  1. ~ 5. : 설계용역 착수 및 완료

○ 2020.  6. : 계약심사 완료 및 공사계약 의뢰

○ 2020.  7. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020.  6. : 공사 준공

○ 2021.  7. : 청소년문화의집 개소

사업명

청소년수련시설(차오름센터)건립

담당자

여성가족과 이세영 (☎226-4981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부족한 청소년 수련시설 확충으로 다양한 체험활동 공간 제공

○ 창의적 문화생활 및 자기개발 지원으로 청소년 건전육성 기반 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. ~ 2019. 6.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 법대로 81번길 1

○ 규 모 : 부지 3,847㎡, 연면적 2,967.56㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,190	2,396	5,454	-	-
국 비	3,500	1,329	2,171	-	-
시 비	1,500	0	1,500	-	-
구 비	3,190	1,067	1,783	-	-

※ 집행잔액 : 340백만원 (구비)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 12. : 설계공모 및 당선작 선정

○ 2016. 09. : 2017년 국고보조금 예산 지원 확정(35억원)

○ 2016. 10. : 2016년 제4차 중앙투자심사 승인

○ 2017. 08. 09. : 도시계획위원회 심의(청소년수련시설 도시관리계획 결정)

○ 2017. 12. 20. : 설계용역 완료

○ 2018. 03. 19. : 기공식

○ 2019. 06. 27. : 준공

○ 2019. 07. 27. : 시설 개관 (2019. 7. 24. 설치)

사업명

수암시장 주차장 조성

담당자

경제정책과 천다정(☎226-5652)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수암시장의 상인회 숙원사업인 주차난 해소 및 시장 이용객을 위한 주차장 조성으로 전통시장 상권 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 남구 야음동 700-1 일원

○ 규 모 : 지상2층3단 / 연면적 3,267㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,300	-	7,320	298	5,682
국 비	7,980	-	4,800	-	3,180
시 비	2,660	-	-	298	2,362
구 비	2,660	-	2,520	-	140

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ’19. 5. 15. : 중소벤처기업부 공모 당선

○ ’20. 3.  2. : 부동산 매입 매매 계약 체결

○ ’20. 2. 19. : 진입도로 개설공사 실시설계 및 인가

○ ’20. 4. 21.~ 5. 30. : 주차장 조성부지 기존 건축물 철거공사

○ ’20. 7.  8. : 진입도로 개설공사 착공

○ ’20. 8. 11. : 기본 및 실시설계용역 업체 선정

□ 향후계획

○ ‘20. 8. 24. : 주차장 실시설계 용역 착수

○ ’21. 1.  3. : 진입도로 개설공사 준공

○ ’21. 1. 20. : 주차장 실시설계 용역 완료

○ ’21. 1. 20. ~ 2. 10. : 계약심사, 일상감사, 업체선정 등 행정절차 이행

○ ’21. 2. 10. ~ 12. 31. : 주차장 조성공사 추진 및 준공

사업명

삼호 철새마을 조성사업

담당자

경제정책과 남혜림(☎226-4901)

□ 사업목적 및 필요성

○ 「삼호철새마을」을 「태화강 철새공원」, 「남산근린공원 수변광장」과 연계,               관광객에게 볼거리·먹거리·숙박지 등을 제공하여 지역경제 활성화 및 고용         창출 기여

□ 사업개요

○ 위  치 : 삼호동 와와공원 일원

○ 기  간 : 2016년 1월 ~ 2019년 12월

○ 규  모 : 지하1층~지상4층, 연면적 929.05㎡

- 철새홍보관 건립, 철새거리 조성, 게스트하우스조성(입간판설치), 주택옥상 태양광설치(그린빌리지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  7,724백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,724	2,449	5,225	50	-
국 비	2,768	1705	1,063	-	-
시 비	1,457	444	1,013	-	-
구 비	3,499	300	3,149	50	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2016. 1. ~ 6.: 타당성 조사 및 기본계획 용역

○ 2016. 11.: 2016년 제4차 중앙투자심사 결과 통보

○ 2017. 1. ~ 6.: 그린빌리지 조성(주택 태양광설치)

○ 2017. 11.: 철새홍보관 건립부지 공유재산 심의

○ 2018. 12.~ 2019. 10.: 철새홍보관 건립 공사, 내부 시설 제작‧설치

○ 2019.12.: 철새홍보관 준공

□ 향후계획

○ 철새홍보관 운영: 남구 도시관리공단 위탁 운영

사업명

옥동 우수저류시설 설치사업

담당자

안전총괄과 김석연(☎226-3505)

□ 사업목적 및 필요성

○ 옥동 우수저류시설 설치로 여천천 주변 침수 피해 예방 및 저감

○ 저류지 내 친수공간 조성하여 주민에게 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 2. ∼ 2019. 3.

○ 위 치 : 남구 옥동 596-5번지 일원

○ 규 모 : 우수저류시설 설치 A=40,816㎡(저류용량 Q=136,000㎥)

※주요시설 : 산책로(L=1.0㎞), 수변데크(L=265m), 전망데크(1개소), 주여수로(1개소), 비상여수로(1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,484백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,484	6,267	1,217	-	-
국 비	3,742	3,525	217	-	-
시 비	1,871	1,378	493	-	-
구 비	1,871	1,364	507	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `19. 3. 31. : 옥동 우수저류시설 설치사업 시설공사 준공

□ 향후계획

○ 옥동 우수저류시설 실시계획인가 준공(연내)

○ 시설 점검 및 유지관리(연중)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 ┌ 당초 : 7,500백만원

└ 변경 : 7,484백만원  (집행잔액 : 16백만원)

○ 사업기간 ┌ 당초 : 2016. 03. ~ 2018. 12.

└ 변경 : 2016. 03. ~ 2019. 03.

사업명

선암동 대나리문화회관 인근 도로확장

담당자

건설과 김정규(☎226-5821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선암동 일원 교통체계 개선을 통한 주민편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 12. ~ 2021. 3.

○ 위 치 : 선암동 대나리문화회관 인근(두왕동 174번길)

○ 규 모 : 도로확장 L=410m, B=8→13m(5m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	135	1,542	1,000	1,323
시 비	2,500	135	1,000	500	865
특 교 금	1,500	-	542	500	458

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2018. 5. ~ 2018. 9. : 실시설계용역 시행

○ 2018. 9. ~ 2019. 2. : 도시계획시설(도로) 실시계획인가

○ 2019. 8. ~ 2020. 5. : 감정평가 및 보상협의

○ 2020. 1. 6. : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2021. 3. : 공사준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초 5,200백만원, 변경 4,000백만원

○ 사업기간 : 당초 2017. 12. ~ 2019. 12., 변경 2017. 12. ~ 2021. 3.

○ 사업내용 : 도로확장 당초 L=660m, 변경 L=410m

사업명

무거동 우신고 일원 도로확장

담당자

건설과 김정규(☎226-5821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우신고 인근 상습적인 교통정체 해소 및 주민 교통 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 3.

○ 위 치 : 대학로1번길 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=520m, B=10→15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	58	3,400	600	942
시 비	4,500	58	3,400	300	742
특 교 세	5,00	-	-	300	200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53%)

○ 2018.  5. ~ 2018. 11. : 실시설계용역 시행

○ 2018. 12. ~ 2019.  3. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가

○ 2019. 7. ~ 2020. 6. : 감정평가 및 보상협의

○ 2019. 12. 27. : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2018. 1. ~ 2019. 12., 변경 2018. 1. ~ 2021. 3.

사업명

수암동 한국알콜사택 일원 도로확장

담당자

건설과 김정규(☎226-5821)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한국알콜사택 인근 상습적인 교통정체 해소 및 주민 교통 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2021. 3.

○ 위 치 : 중앙로28번길 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=165m, B=6→11.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,700	33	2,201	200	266
시 비	2,700	33	2,201	200	266

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

○ 2018. 5. ~ 11.: 실시설계 용역 및 실시계획 인가

○ 2018. 12. ~ 2019. 6.: 편입토지 및 물건 보상협의

○ 2019. 12. 26. : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2018. 5. ~ 2019. 12., 변경 2018. 5. ~ 2021. 3.

사업명

삼호 그린빌리지 공영주차장 조성

담당자

교통행정과 김현철(☎226-5911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼호동 정광사 일원의 주택가 골목길은 빌라, 다세대주택 밀집지역으로       열악한 주거환경, 좁은 도로, 늘어나는 차량 등으로 만성적인 주차난을        겪고 있어 주차민원이 상시적으로 발생하는 지역이므로 공영주차장을        신축하여 지역 주민들의 삶의 질 향상 및 불법 주·정차를 방지하여 소방도로         확보를 통한 안전도시 구현에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 무거동 1252-6번지 일원 (부지면적 949㎡)

○ 규 모 : 지하 1층/지상 5층, 연면적 3,558㎡, 주차공간 79면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,960백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,960	4,060	48	3,852	-
시 비	3,500	-	48	3,452	-
구 비	4,060	4,060	-	-	-
특 교 세	400	-	-	400	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 2017. 10. 사업대상지 선정 및 부지 매입

○ 2018. 03. 삼호1지구 지구단위계획 변경(단독주택→주차장)

○ 2018. 06. 임시주차장 조성

○ 2019. 09. 기본 및 실시설계

○ 2019. 11. 공사 착공

○ 2020. 07. 계약기간 변경(공사기간 연장, 2020. 09. → 2020. 12.)

○ 2020. 08. 구조물작업(1층 벽체) 및 배관작업 중

□ 향후계획

○ 2020. 12 준공예정

사업명

무거 섬들공원 공영주차장 확장

담당자

교통행정과 김현철(☎226-5911)

□ 사업목적 및 필요성

○ 울산대학교 앞 상가 주변 골목길의 주차환경이 열악하여 현 섬들공원의 용도변경 후 공영주차장을 확장하여 지역경제 활성화와 주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 05. ~ 2019. 04.

○ 위 치 : 무거동 629-22번지 일원

○ 규 모 : 지하 47면 → 지하·지상 1층 2단 99면(52면 증)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	453	1,463	-	-
시 비	1,500	423	48	-	-
구 비	500	30	-	-	-

□ 추진상황

○ 2017. 05. 무거 섬들공원 도시관리계획 변경(폐지) 용역

○ 2017. 10. 주민설명회 개최

○ 2017. 11. 도시계획위원회의 심의

○ 2018. 06. 실시설계

○ 2018. 10. 공사 착공

○ 2019. 04. 공사 완료

사업명

선암지구 생활환경 개선사업

담당자

도시창조과 김광용(☎226-4803)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가산업단지 인접지역으로 고립되어 도시기능이 쇠퇴한 선암본동의 주       거환경 개선 필요

○ 도시활력증진을 위한 커뮤니티센터를 건립하여 정주여건 향상 및 주민공동체       활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2020

○ 위 치 : 선암동 일원

○ 규 모 : 주거환경 개선 A=70,610㎡

- 주민공동시설: 커뮤니티센터, 공중목욕탕, 다목적실 등

- 기반시설: 소방도로 확장, 생활도로 정비, 쌈지공원 등

- 일자리: 돌봄서비스 및 공동시설 운영관리 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,320.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,320.5	4,124	2,252	1944.5	-
국 비	3,127	1,830	826	471	-
시 비	1,563.5	695	118	750.5	-
구 비	3,630	1,599	1,308	723	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2015. 10월 : 2016년 도시활력증진지역 개발사업 선정

○ 2016.  4월 ~ 2017.  2월: 마스터플랜 및 실시설계용역(토목)

○ 2016. 11월 ~ 2017.  8월: 커뮤니티센터(건축) 기본 및 실시설계용역

○ 2017.  9월 ~ 2019.  3월: 선암지구 생활환경 개선공사 시행

○ 2018.  1월 ~ 2020.  5월: 커뮤니티센터 건립공사 시행

□ 향후계획

○ 시설물 유지관리 추진

사업명

갈현지구 외 2개 집단취락지구 연결도로 개설

담당자

도시창조과 임연하(☎226-4802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사업 부지 일원은 집단취락지구로써 마을간 연결도로가 없어 경작을          위한 주민과 농기계 이동이 불편하고 차량 우회통행 등 교통여건이 열악한       실정으로 도로개설이 시급함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017 ~ 2021

○ 위 치 : 남구 옥동 1264번지 일원

○ 규 모 : 도로 개설 L=1,406m, B=6~7.5m

- 1단계(20년도, 갈티→갈현):  L=680m,  B=6~7.5m,

- 2단계(21년도, 갈현→감나무진):  L=726m,  B=6~7.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,625	197	1,901	1,127	1,400
국 비	2,315	191	1,451	73	600
시 비	-	-	-	-	-
구 비	2,310	6	450	1,054	800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2016.  9월: 2017년 국토부 주민지원사업 선정

○ 2017.  3월 ~ 12월: 도시관리계획 결정 및 실시설계용역

○ 2018.  4월: 도시계획시설(도로)사업 시행자지정 및 실시계획인가

○ 2018.  5월 ~ 2020. 2월. : 손실보상협의

○ 2020.  4월 : 1구간 공사 착공

□ 향후계획

○ ‘20. 12. : 1구간 공사 준공 예정

○ ‘21.  1. : 2구간 공사 착공 예정

○ ‘21. 12. : 2구간 공사 준공 예정

사업명

공업탑 일원 보행환경 개선사업

담당자

도시창조과 라승태(☎226-4842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공업탑 일원 구도심 이면도로상 불법주정차가 극심하여 보행환경이 열악함에 따라 보행자 편의중심으로 환경개선 하여 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 :  2020. 01. ~ 12.

○ 위 치 : 남구 삼산로35번길 일원 (남부경찰서 인근)

○ 규 모 : 보행로 조성 및 경관개선 (L=2,450m, B=6~10m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,430백만원(공사비 2,246백만원, 용역비 86백만원, 전선지중화 1,098)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,430	-	1,184	2,246	-
국 비	1,000	-	16	984	-
구 비	1,330	-	1,168	162	-
특 교 세	1,100	-	-	1,100	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45 %)

○ 19. 08. : 주민설명회

○ 20. 04. : 공사착공

□ 향후계획

○ 20. 12. : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

궁거랑 마실길 조성사업

담당자

도시창조과 라승태(☎226-4842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무거천 주변 이면도로내 주차차량과 통과차량으로 보행자 통행공간이

미확보 됨에 따라 보행로 확장으로 안전한 가로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 01. ~ 2019.12.

○ 위 치 : 남부순환도로23번길, 삼호로7번길,11번길 일원

○ 규 모 : 보행데크 설치 (L=884m, B=1.7m~2.0m), 조망데크 및 편의시설 설치

보도확장 (L=204m, B=1m→2m), 경관조명 등 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,680백만원(시비 1,400, 구비 280, 특교금 700, 특교세 300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,680	1,625	1,055	-	-
시 비	1,400	1,320	80	-	-
구 비	1,280	305	975	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ ’17. 7. 27. : 2018년 도시경관 형성 시범사업 선정

○ ’18. 3. : 실시설계용역 완료

○ ’18. 6. ~ 19.  1. : 1차 사업 완료

○ ’19. 2. ~ 19. 12. : 2차 사업 완료

□ 향후계획

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

치매안심센터 건립

담당자

건강행복과 박선영(☎226-2474)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매 예방, 상담, 조기진단, 보건ㆍ복지 자원연계 및 교육 등 ｢치매통합관리서비스｣를 제공하여 건강한 노년생활 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 11.~ 2019. 3.

○ 위 치 : 남구 삼산중로 132(남구보건소 내)

○ 규 모 : 지하 1층~지상 3층, 연면적 997.14㎡, 대지면적 300㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,480백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,480	1,071	1,409	-	-
국 비	512	512	-	-	-
시 비	163	99	64	-	-
구 비	1,805	460	1,345	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 3. : 건립부지 확정

○ 2018. 3. : 설계용역완료, 규모변경(지하1층 추가, 연면적 900→997.14㎡)

○ 2018. 4. : 공사착공

○ 2019. 3. : 공사준공

□ 향후계획

○ 2019 공사준공 및 개소식 후 치매정책사업에 따른 치매안심센터 운영

○ 향후 2년간 건물 하자 발견 및 보수진행

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당초	변경	비고
사업규모	연면적 900㎡	연면적997.14㎡	자하1층 추가로 사업규모, 총사업비 및 기간 변경
총사업비	2,171백만원	2,480백만원
사업기간	2018.10. 준공	2019.3. 준공

10-2. 지방채 발행사업

우리 남구에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 남구에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.