109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 남구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
복합문화 반다비 빙상장 건립	19,300	-	88	548	18,664	2024	2019	0
수암시장 주차장 조성	13,300	7,320	426	5,554	-	2021	2019	61.7
장생포 문화창고 (A-FACTORY) 건립	10,198	5,953	3,947	238	-	2020	2016	100
선암동 대나리경로당 신축 이전	3,150	516	214	2,420	-	2021	2018	70.19
문수 청소년 문화의집 재건축	4,800	11	769	4,020	-	2021	2018	20
갈현지구 외 2개 집단취락지구 연결도로 개설	4,450	2,098	988	889	475	2022	2019 (재심사)	60
선암지구 생활환경 개선사업	8,240.5	6,368	1,802	-	-	2020	2019 (재심사)	100
공업탑 일원 보행환경 개선사업	3,430	1,184	1,134	1,112	-	2021	2018	100
선암동 대나리문화회관 인근 도로확장	4,000	1,670	721	1,609	-	2021	2017	80
무거동 우신고 일원 도로확장	5,000	2,712	623	1,665	-	2021	2018	80
수암동 한국알콜사택 일원 도로확장	2,700	2,234	239	227	-	2021	2018	100
삼호 그린빌리지 공영주차장 조성	7,956	4,178	2,046	1,732	-	2021	2017	100
울산여고 하부 공영주차장 신축	4,800	-	-	2,479	2,321	2022	2019	30

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

울산 남구 복합문화 반다비

빙상장 건립

담당자

공공시설과 정현진(☎226-3632)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심지 내 대규모 공공시설 건립부지 확보 어려움

○ 광역시 중 공공 실내 빙상장이 없는 울산지역 내 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 7. ~ 2024. 9.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 강남로 26(삼산배수장 내)

○ 규 모

(빙상장)활용대지 9,290㎡, 지상3층/연면적 6,500㎡ 정도

(공영주차장)활용대지 4,495㎡, 100면 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 19,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	19,300	-	88	548	18,664
국 비	6,492	-	15	184	6,293
시 비	5,710	-	-	162	5,548
구 비	7,098	-	73	202	6,823

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2019. 10. : 2020년도 생활SOC복합화사업공모 선정

○ 2019. 11. ~ 12. : 지방재정영향평가, 공유재산관리계획심의, 중앙투자심사

○ 2020. 6. ~  7. : 공공건축 사업계획 사전검토, 지반조사용역

○ 2020. 9. ~ 11. : 공공건축 기획심의, 설계공모 공고

□ 향후계획

○ 2021. 4. : 설계공모 심사위원회 개최(당선작 선정)

○ 2021. 8. ~ 2022. 2. : 설계용역 시행

○ 2022. 9. ~ 2024. 7. : 공사시행

○ 2024. 9. : 시범운영 후 개관

사업명

수암시장 주차장조성

담당자

공공시설과 서성용(☎226-3532)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수암시장 주차난 해소 및 전통시장 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 5. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 야음동 700-1번지 일원

○ 규 모

- 도시계획도로(소로3-171호선) 개설(L=141.5m)

- 주차장 건립(철골조 2층 3단 107면, 대지면적: 1,814m2)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,300	7,320	426	5,554	-
국 비	7,980	4,800	156	3,024	-
시 비	2,660	-	130	2,530	-
구 비	2,660	2,520	140	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 주차장 조성공사 추진 중, 61.7%)

○ 2019. 7. ~ 12. : 편입대지 감정평가 및 매입 추진

○ 2020. 7. ~ 2021. 1. : 도로개설공사 추진 및 준공

○ 2020. 8. ~ 2021. 1. : 주차장조성공사 실시설계 추진 및 완료

○ 2021. 4. : 주차장조성공사 착공(공정률 25%, 2021. 7. 12.기준)

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 주차장조성공사 준공

사업명

장생포 문화창고(A-FACTORY) 건립

담당자

관광과 최준영(☎226-5673)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐 산업시설인 냉동창고 리모델링으로 대한민국 공업의 출발점인‘울산공업센터 특정공업지구’기공식 장소를 기념하고 예술창작활동 등을 위한 복합문화예술 공간으로 재창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 4. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 장생포고래로 110

○ 규 모 : 부지 2,331㎡, 연면적 6,275.41㎡, 지하1층/지상7층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,198백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,138	5,953	3,947	238	-
국 비	2,000	211	1,788	-	-
구 비	7,633	5,742	1,653	238	-
기 타	505	-	505	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  4. : 공유재산심의 및 지방재정투자심사 심의

○ 2017. 10. : 실시설계 용역(‘18. 4. 완료)

○ 2018.  8. : 착공

○ 2019.  4. : 기본 및 실시설계 변경 용역(‘19. 9. 완료)

○ 2020.  1. : 공사 재개

○ 2020. 12. : 준공

□ 향후계획

○ 2021.  1. : 고래문화재단 위탁 운영

사업명

선암동 대나리경로당 신축 이전

담당자

노인장애인과 최인주(☎226-6966)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선암동 대나리 문화회관 협소 및 노인복지 수요 증가에 따른 시설 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 2. ~ 2021. 9.

○ 위 치 : 선암동 632-1번지 일원(선암근린공원내)

○ 규 모 : 대지 1,322㎡, 연면적 761.8㎡, 지상 4층대나리 1동

○ 사업내용: 대나리경로당 및 프로그램실 이전 신축

- 1층경로당 251㎡, 2층헬스장 255㎡, 3층프로그램실 255㎡, 4층기계실 83㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,150백만원                                  (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,150	516	214	2,420	-
시 비	2,400	516	210	1,674	-
구 비	750	-	4	746	-

□ 추진상황(공정률 : 70.19%)

○ 2018. 2. : 대나리경로당 신축 이전 결정

○ 2018. 10. : 중기지방재정계획 및 투자심사, 공유재산관리계획 반영

○ 2019. 8. ~ 9. : 환경영향평가 및 공원조성계획 변경 완료

○ 2020. 3. ~ 4. : 지질조사 및 임목조사 완료

○ 2020. 5. : 실시설계 용역 완료

○ 2020. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 인가 완료

○ 2020. 7. ~ 9. : 계약심사 및 일상감사

○ 2020. 8. : BF예비인증

○ 2020. 9. ~ 10. : 공사, 감리 입찰 및 계약

○ 2020. 11. : 착공

○ 2021. 2. : 도시계획시설사업 실시계획(변경) 인가

○ 2021. 7. : 외부 토목공사 진행 중

□ 향후계획

○ 2021. 9. : 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 총 사업비: 3,230백만원(증 구비80백만원, 2021년도 1회 추경)

- 공사비 부족으로 인한 시설비 및 자산취득비 증액

○ 소요재원 및 사업비 집행현황(변경)

구 분	당초	변경	집행액		향후 소요액
	계	계	기집행	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,150	3,230	516	214	2500	-
시 비	2,400	2,400	516	210	1674	-
구 비	750	830	-	4	826	-

○ 연차별 투자계획(변경)

재원별	총사업비	연차별 투자계획					비고
		계	2018	2019	2020	2021
계	3,230	3,230	2,700	-	300	230(증80)
시 비	2,400	2,400	2,400	-	-	-
구 비	830	830	300	-	300	230(증80)

○ 통계목별 예산 현황

구분	변경 전	변경 후	비고
계	3,150	3,230
시설비	2,906	2,936	증 30
감리비	94	94
자산취득비	150	200	증 50

사업명

문수 청소년문화의집 재건축

담당자

여성가족과 우선미(☎226-4981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 청소년문화의집을 재건축하여 안전하고 트렌드에 맞는 청소년 복합       문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 8. ~ 2021. 8.

○ 위 치 : 울산광역시 남구 북부순환도로 56(무거동)

○ 규 모 : 부지 264.12㎡, 연면적 1,224.71㎡(지상8층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	11	769	4,020	-
시 비	2,400	-	20	2,380	-
구 비	1,400	11	216	1,173	-
특 교 세	1,000	-	533	467	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 12. : 설계공모 및 당선작 선정

○ 2020.  1. ~ 5. : 설계용역 착수 및 완료

○ 2020.  6. : 계약심사 완료 및 공사계약 의뢰

○ 2020.  7. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021.  8. : 공사 준공

○ 2021.  9. : 청소년문화의집 개소

사업명

갈현지구 외 2개 집단

취락지구 연결도로 개설

담당자

도시창조과 박종진(☎226-4802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 도로여건으로 농기계 이동이 불편하여 주민들의 생업영위에 지장을 초래하고 있어 도로개설이 시급함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. ~ 2022.(6년)

○ 위    치 : 옥동 1264번지 일원

○ 규    모 : 도로개설 L=1,348m, B=6~7.5m

- 2020년도 1단계 : L=903m, B=6~7.5m / 갈티↔갈현

- 2021년도 2단계 : L=445m, B=6~7.5m / 갈현↔감나무진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,450	2,098	988	889	475
국 비	2,695	1,642	73	600	380
구 비	1,755	456	915	289	95

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2017.  3. ~ 2018.  4. : 도시관리계획(도로) 결정 및 실시설계용역

○ 2018.  4. : 도시계획시설(도로)사업 시행자지정 및 실시계획인가

○ 2018. 11. ~ 2020.  2. : 손실보상협의 및 수용 완료

○ 2020.  4. ~ 12. : 1단계 공사 시행

□ 향후계획

○ 2021.  5. ~ 2022.  7. : 2단계 공사 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 : 도로개설 L=1,406m, B=6~7.5m, 사업기간: 2017 ~ 2021(5년)

○ 변경 : 도로개설 L=1,348m, B=6~7.5m, 사업기간: 2017 ~ 2022(6년)

사업명

선암지구 생활환경 개선사업

담당자

도시창조과 박종진(☎226-4802)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가산업단지 인접지역으로 고립되어 도시기능이 쇠퇴된 선암본동의 주거환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 및 공동체 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2016. ~ 2020.(5년)

○ 위    치 : 선암동 일원

○ 사업내용 : 주거환경 개선 A=70,610㎡

- 기반시설 : 도로, 소공원 정비 등 생활환경정비

- 주민공동시설 : 커뮤니티센터(행정복지센터, 공중목욕탕, 돌봄교실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,240.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,170	6,368	1,802	-	-
국 비	3,127	2,657	470	-	-
시 비	1,564	813	751	-	-
구 비	3,479	2,898	581	-	-

※ 선암동행정복지센터 이전 시설비 1,750백만원(구비-‘19년 1,600,‘20년 150), 자산취득비 100백만원(‘19년) 별도 편성

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2016.  4. ~ 2017.  2. : 마스터플랜 및 실시설계용역(토목 등)

○ 2016. 12. ~ 2017.  8. : 커뮤니티센터 기본 및 실시설계용역(건축)

○ 2017. 11. ~ 2019.  3. : 생활환경정비공사(기반시설) 시행

○ 2018.  2. ~ 2019. 12. : 선암지구 커뮤니티센터 건립공사 시행

○ 2019.  1. ~  5. : 센터 내 행정복지센터 이전에 따른 공사정지

○ 2019.  2. 25. : 선암지구 생활환경 개선사업 계획변경 승인(국토부)

○ 2019.  6. ~ 2020.  5. : 공사시행

○ 2020.  6. 01. : 행정복지센터 이전 개소

○ 2020.  8. 20. : 목욕탕 개장

사업명

공업탑 일원 보행환경 개선사업

담당자

도시창조과 라승태(☎226-4843)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공업탑 일원 구도심 이면도로상 차량과 보행자 통행공간 미분리로 보행환경이 열악함에 따라 보행자 편의중심으로 환경 개선하여 안전하고 걷고 싶은 거리조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2018. 1. ~ 2021. 5.

○ 위    치 : 울산광역시 남구 삼산로35번길 일원

○ 규    모 : 도로정비(L=1.8km, B=6~10m), 간판개선 및 전선지중화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,430백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,430	1,184	1,134	1,112	-
국 비	1,000	16	984	-	-
구 비	1,330	69	149	1,112	-
특 교 세	1,100	1,100	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 4. ~ 2019. 8. : 실시설계용역, 주민의견수렴, 공사 계약심사 및

일상감사 등

○ 2020. 1. ~ 2021. 5. : 공사

사업명

선암동 대나리문화회관 인근 도로확장공사

담당자

건설과 황태균(☎226-5822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 상개~매암간 도로 램프 설치로 인한 교통량 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2021. 8. 14.

○ 위 치 : 선암동 대나리문화회관 인근(두왕동 174번길)

○ 규 모 : 도로확장 L=410m, B=8→13m(5m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	1,670	721	1,609	-
시 비	2,500	993	444	1,063	-
특 교 금	1,500	677	277	546	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2018.  5. ~ 2018. 9. : 실시설계용역 시행

○ 2018.  9. ~ 2019. 5. : 토지분할 및 실시계획인가(2019.5.2.)

○ 2019.  8. ~ 2020. 5. : 감정평가 및 보상협의

○ 2020.  1. 6. : 공사 착수 [공사중지:20.1.8.~3.29.(보상절차 진행)]

○ 2020.  6. : 도로확장부 벌목

○ 2020.  7. ~ 2021. 3. : 가설방음휀스 설치 및 도로 확장부 토공 작업 시행

○ 2020. 10. ~ 2021. 6. : 패널옹벽(1,2단) 설치[L=404m, H=1.5~6m]

○ 2021.  7 ~ 8. : 도로 측구 및 보도 설치, 도로 포장

□ 향후계획

○ 2021.  8. : 공사 준공

사업명

무거동 우신고 일원 도로확장공사

담당자

건설과 황태균(☎226-5822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 무거터널 개통으로 인한 교통량 증가

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2021. 9. 2.

○ 위 치 : 대학로 1번길(무거동 우신고 일원)

○ 규 모 : 도로확장 L=520m, B=10m→15m(5m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000	2,712	623	1,665	-
시 비	4,500	2,712	462	1,326	-
특 교 세	500	-	161	339	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2018. 5. ~ 2018. 11. : 실시설계용역 시행

○ 2018. 10. ~ 2019. 6. : 토지분할 및 실시계획인가(2019.5.2.)

○ 2019. 7. ~ 2020. 6. : 감정평가 및 보상협의

○ 2019. 12. 27. : 공사 착수[협의 지연에 따른 공사중지(20.1.8.~3.29.)]

○ 2020. 4. ~ 12. : 도로확장부 옹벽 시공(L=145m, H=3.5~4.0m)

○ 2021. 2. : 우신고 앞 미확장구간(37m) 추가 용역 시행

○ 2021. 3. ~ 6. : 실시계획(변경)인가 및 보상

○ 2021. 7. ~ 8. : 옹벽 철거 및 도로 확장 (L=37m)

○ 2021. 8. : 보도 설치 및 도로 포장

□ 향후계획

○ 2021. 9. : 공사 준공

사업명

수암동 한국알콜사택 일원 도로확장공사

담당자

건설과 황태균(☎226-5822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 야음동과 수암동을 잇는 상습 교통정체 구간 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 5. ~ 2021. 3. 11.

○ 위 치 : 남구 여천로32번길 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=165m, B=6.0m→11.5m(5.5m 확장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,700	2,234	239	227	-
시 비	2,700	2,234	239	227	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 5. ~ 11. : 실시설계 용역

○ 2018. 7. 5. : 도시계획시설사업 실시계획인가

○ 2018. 10. 18. : 도시계획시설사업 실시계획(1차변경) 및 관리계획 변경

○ 2018. 12. ~ 2019. 6. : 편입토지 및 물건 보상협의

○ 2019. 7. ~ 2020. 6. : 수용재결 신청 및 보상금 지급 및 공탁

○ 2019. 12. 26. : 공사 착수[공사중지:20.1.8.~3.29.(보상절차 진행)]

○ 2020. 6. ~ 7. : 지장건물(2동/4동, 연면적 281㎡/1,071㎡) 철거

○ 2020. 9. ~ 12. : 지장건물(시점부 4층) 철거 및 확장공사 추진

○ 2021. 2. : 보도 포장 및 차도 포장 완료

○ 2021. 3. 11. : 공사 준공  ※ 도시계획시설사업 공사완료 공고(2021. 6. 22.)

사업명

삼호 그린빌리지 공영주차장 조성

담당자

교통행정과 김현철(☎226-5912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 삼호동 정광사 일원의 주택가 골목길은 빌라, 다세대주택 밀집지역으로 열악한 주거환경, 좁은 도로, 늘어나는 차량 등으로 만성적인 주차난을 겪고 있어 주차민원이 상시적으로 발생하는 지역이므로 공영주차장을 신축하여 지역 주민들의 삶의 질 향상 및 불법 주·정차를 방지하여 소방도로 확보를 통한 안전도시 구현에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 10. ~ 2021. 4

○ 위 치 : 무거동 1252-6번지 일원

○ 규 모 : 지하1층/지상5층, 연면적 3,558㎡, 주차공간 77면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,956백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,956	4,178	2,046	1,732	-
시 비	3,500	-	1,768	1,732	-
구 비	4,056	4,056	-	-	-
특 교 세	400	122	278	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 10. : 2017년 국토교통부 도시재생 뉴딜사업 공모 신청

○ 2017. 12. : 사업대상지 선정(삼호 그린빌리지 공영주차장 부지 매입)

○ 2018.  2. : 공영주차장 조성계획 검토

○ 2018.  6. : 임시주차장 조성

○ 2018.  9. ~ 11. : 설계용역 발주준비(계약심사, 일상감사, 사업수행능력평가 등)

○ 2019.  9. : 기본 및 실시설계 용역 완료

○ 2019. 11. : 공사 착공

○ 2021.  3. : 공사 준공(2021.4. 건설사업관리용역 완료)

○ 2021.  6. : 시설 운영

사업명

울산여고 하부 공영주차장

조성사업

담당자

도시창조과 라승태(☎226-4843)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공영주차장 조성으로 인근지역 주차난 해소 및 보행안전 확보로 지역 주민의 정주여건 개선과 공업탑 일원 상가 방문객의 주차공간 확보로 지역상권 활성화

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020. 1. ~ 2022. 2.

○ 위    치 : 울산광역시 남구 삼산로9번길 16(울산여고 내)

○ 규    모 : 공영주차장 조성 67면(A=2,086㎡)

※ 테니스장 및 부대시설 증축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,800	-	-	2,479	2,321
국 비	2,400	-	-	1,200	1,200
시 비	1,200	-	-	600	600
구 비	700	-	-	350	350
특 교 세	500	-	-	329	171

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 30%)

○ 2020. 04. ~ 2020. 12. : 교육청 협약, 실시설계용역, 공사 계약심사 및 일상감사 등

○ 2021. 02. ~ 2022. 02. : 공사

□ 사업변경 내역

○ 투자심사 신청 사업비 : 4,800백만원

○ 실제 교부 사업비 : 4,800백만원

10-2. 지방채 발행사업

우리 남구에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 남구에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.